Załącznik nr 1 
                                                                                                         do protokołu konieczności nr  8/OP.ŚL/2003

Roboty dodatkowe dotyczące STRONY POŁUDNIOWEJ.

I.	Roboty remontowe, budowlane, wzmocnienie konstrukcji.

        Zakres robót: skucie posadzki holu wejściowego w poziomie parteru oraz wykonanie nowej posadzki z płyt granitowych, dodatkowe ścianki działowe z płyt  
                               G-K na rusztach metalowych z wypełnieniem wełną mineralną, dodatkowe posadzki z desek „badi” , drzwi przeciwpożarowe z holu wejściowego do holu kasowego oraz do pomieszczeń działu marketingu, konstrukcja stalowa lady kasowej, ścianka kasy ze szkła antywłamanio- wego,  parapety drewniane w miejsce lastrykowych.

                                                                                     Koszt robót:  98.891,51 zł

                Uzasadnienie zlecenia robót.

       Hol wejścia głównego do budynku opery nie jest objęty zakresem projektu budowlanego i wykonawczego, nie przewidziano więc i nie zawarto w przedmiarach robót, a więc także w ofercie przetargowej wykonawcy- robót remontowych w holu. Hol wejścia głównego łączy się bezpośrednio z holem kasowym i pomieszczeniami marketingu oraz 
       z klatką schodową prowadzącą do sali reprezentacyjnej, jest więc miejscem eksponowanym obiektu. Posadzka holu jest nierówna, wykonana jest z terakoty
       w szachownicę czarno-białą i jest w wielu miejscach zniszczona. Konieczne jest wykonanie posadzki z płyt granitowych stanowiących nawiązanie do takich płyt zaprojektowanych w holu kasowym.
       Wykonanie dodatkowych ścianek działowych z płyt G-K oraz dodatkowej posadzki „badi” wynika z wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dla działu marketingu. 
       Parapety okienne nie zostały opisane co do ich standardu i materiału zarówno w projekcie wykonawczym jak i w przedmiarze robót, tak więc Wykonawca przyjął w kosztorysie ofertowym najtańsze parapety (a 50,-zł) nie odpowiadające charakterowi i wystrojowi
       obiektu. Zamontować należy parapety drewniane harmonizujące z posadzką „badi”.
       W przedmiarach robót nie zostały również ujęte zamurowania po wykutych starych parapetach. Parapety okienne po stronie południowej znajdują się na wysokości około
       60 cm od podłogi, konieczne jest więc zamontowanie przy oknach balustrad uchylnych (ze względów bezpieczeństwa). Balustrad nie przewidziano w projekcie.
      Przepisy ochrony p.poż. wymagają zamontowania drzwi p.poż. pomiędzy klatką schodową a holem kasowym, a także dodatkowych drzwi do pomieszczenia działu
      marketingu. Dla działu marketingu wydzielone zostało dodatkowe pomieszczenie nie przewidziane w projekcie, o które Użytkownik wystąpił w piśmie z dnia 06.02.2003 r.
      W przedmiarach robót pominięto także konstrukcję stalową lady kasowej ( ujęto tylko drewno) oraz szybę antywłamaniową do boksu kasowego.

 II.     Szklenie okien.

       Zakres robót: rozszklenie drewnianych ram okien zespolonych i ponowne zaszklenie.

                                                                                     Koszt robót:  10.875,10  zł

                Uzasadnienie zlecenia robót.

       W projekcie nie przewidziano wymiany okien, ani samych szyb na elewacji południowej budynku filharmonii opery. Jest to frontowa, eksponowana elewacja obiektu od strony ul. Moniuszki i wejścia głównego do obiektów Opery Śląskiej.
       Ramy okien są krzywe, źle osadzone, część szyb jest ornamentowa w kolorze miodowym, część przezroczysta, niektóre szyby są popękane, a wszystkie porysowane.
       Na naradzie koordynacyjnej w dniu 25.11.2003 r. (protokół nr 41, pkt 4) podjęto decyzję o wymianie szyb na jednolite – przezroczyste.

        Łączny koszt robót dodatkowych objętych protokołem konieczności 
        nr 8/OP.ŚL/2003 dotyczącym STRONY POŁUDNIOWEJ:

                              NETTO (bez VAT)                                  109.766,61 ZŁ