ANEKS Nr  2 / 537/TW / 2003
z dnia 7 października  2003 r.
do Umowy o Finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 Nr 537/TW/2002, z dnia 25 czerwca 2002 roku , zawartej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez : 
 JANA OLBRYCHTA                            –    Marszałka Województwa Śląskiego i 
WALDEMARA JĘDRUSIŃSKIEGO    –    Członka Zarządu Województwa Śląskiego ,
a Miastem i Gminą Żarki  reprezentowanymi  przez :  
ANDRZEJA LECHA             -          Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
STANISŁAWA ZBIRÓGA    -         Członka Zarządu Miejskiego w Żarkach 
Aneks sporządza się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego w projekcie  C-76-0028„Budowa kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami w mieście Żarki etap II oraz we wsi Wysoka Lelowska. Zmiany polegają na rezygnacji z przepompowni ścieków na rzecz budowy kanału odprowadzającego ścieki do rozbudowywanej w kolejnym etapie sieci kanalizacyjnej. Koszt budowy przepompowni wynosić miał  41 417,25 zł , co przy  43% dofinansowaniu tej inwestycji oznacza zmniejszenie dotacji o kwotę 17 809 zł.                                            
Strony zgodnie postanawiają :
§ 1
Dokonać zmiany Umowy poprzez zmianę zapisów załącznika nr 1,2 oraz 3, które otrzymują brzmienie załączników do niniejszego aneksu. 
§ 2
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie .                                                                                
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4
Aneks sporządzony został w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, ponadto po jednym otrzymują : Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu, Jednostka Koordynacji Programu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Województwo:						Beneficjent:

................................................				.................................................

................................................				.................................................
(upoważnieni przedstawiciele)                                        (upoważnieni przedstawiciele)

                   
Załączniki:
1.	Zestawienie Projektów, koszty ich realizacji, źródła finansowania oraz plan zapotrzebowania na środki,
2.	Plan zamówień publicznych,
3.	Harmonogram realizacji projektów,