KARTA ZADANIA

 Symbol Karty Działania:			 Numer kolejny karty zadania:

B3
	
1	

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa zadania: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

	

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia: 
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na końcu niniejszego paragrafu.

36	

Podmiot uprawniony:

Samorząd Województwa Śląskiego	

1.	DANE OGÓLNE 
Opis zadania:
Zadanie obejmuje kontynuację realizacji szpitala z sukcesywnym przekazywaniem do użytku kolejnych pawilonów i uruchamianiem oddziałów szpitala, w tym:
-	przeniesienie oddziałów szpitalnych: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedii, okulistyki, dermatologii i onkologii,
-	dokończenie wyposażenia bloku operacyjnego,
-	uruchomienie oddziałów intensywnej terapii, wybudzeniowego, neurologii, kardiologii, onkologii i rehabilitacji oraz apteki szpitalnej,
-	doposażenie oddziałów okulistyki i laryngologii,
-	realizację infrastruktury informatycznej szpitala,
-	doposażenie w sprzęt rentgenowski mobilny.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):
Ze względu na niewystarczającą bazę lecznictwa zamkniętego na terenie Rybnika w 1976 roku rozpoczęto – w ramach inwestycji centralnych - budowę szpitala. Sukcesywne uruchamianie poszczególnych oddziałów nowego szpitala wiąże się z przenoszeniem kolejnych oddziałów, ze starych, przestarzałych obiektów szpitalnych w mieście, a w efekcie ich likwidację. Zakończenie budowy szpitala w Rybniku wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców miasta i okolic do placówek zamkniętej opieki zdrowotnej. Będzie miało również wpływ na warunki hospitalizacji pacjentów i poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail      [Beneficjent – osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]
Samorząd Województwa Śląskiego , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: marszal@silesia-region.pl 

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena): 
Wybór zadania zdeterminowany jest koniecznością zakończenia wcześniej rozpoczętej inwestycji oraz koniecznością utworzenia na terenie Rybnika wysokospecjalistycznego ośrodka pozwalającego na poprawę dostępności do specjalistycznych usług lekarskich i likwidację przestarzałych i nieekonomicznych szpitali w mieście.
Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002”	
Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)  
Efektem zadania jest przekazanie do użytku pełnoprofilowego szpitala obejmującego 27 obiektów .
W 2001 r. przewiduje się przekazanie do użytku oddziałów chirurgii ogólnej i urazowej, okulistyki, OIOM pooperacyjnego, częściowo onkologii i dermatologii – łącznie 206 łóżek.
Po ograniczeniu kwoty dotacji na rok 2002, zmianie uległy terminy uruchamiania kolejnych obiektów.
W roku 2002 przewiduje się uruchomienie stacji dializ z 11 stanowiskami oraz przekazanie 11 łóżek na oddziale OIT, /oddział intensywnej terapii/.
Kolejne oddziały uruchomione będą w 2003 roku – łącznie 155 łóżek  na oddziałach urologii, dermatologii, onkologii, rehabilitacji i przewlekle chorych oraz 60 łóżek w organizowanych oddziałach neurologii i kardiologii.
Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi po 2003 roku – przekazany zostanie do użytku pawilon diagnostyczno – zabiegowy nr 6 z obiektem dla Zakładu Radioterapii Wysokoenergetycznej z przyspieszaczem megawoltowym oraz sfinalizowane zostaną zakupy pierwszego wyposażenia dla Szpitala.
Efektem działania będzie również zagospodarowanie terenów wokół szpitala tj. wybudowanie drogi, placów, parkingów, chodników, lądowiska dla helikopterów, urządzenie terenów zielonych, małej architektury, a także ukończenie docelowego uzbrojenia terenu w tym przede wszystkim wykonanie drugostronnego zasilania w wodę i ukończenie sieci energetycznych.	
Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT – bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego zadania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem tego zadania będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych w Rybniku i całym powiecie rybnickim poprzez skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie oraz pobytu w zamkniętej placówce służby zdrowia. Zakończenie budowy i oddanie do użytku szpitala wpłynie także na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.	

Oddziaływanie na otoczenie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie – zmiany w regionie spowodowane realizacją zadania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)
W wyniku realizacji tego zadania w długim okresie czasu nastąpić powinna poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakłada się, że ulegnie poprawie efektywność działania placówek służby zdrowia w powiecie rybnickim (oddanie do użytku nowego obiektu szpitala pozwoli także na likwidację 3 istniejących – przestarzałych i nieekonomicznych szpitali w mieście) oraz zostaną utrzymane dotychczasowe miejsca pracy. Realizacja  tego zadania przyczyni się do wzmocnienia funkcji ośrodka regionalnego w Rybniku. 	

2.PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)
W przypadku zadania o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonego do kontraktu: zakreślić odpowiedź
Czy teren jest własnością beneficjenta	Tak 	Nie	
Czy istnieje	Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania	Tak 	Nie	
	Projekt budowlany i pozwolenie na budowę	Tak 	Nie	
	Raport oddziaływania inwestycji na środowisko	Tak 	Nie 	

Tabela finansowa: 
okres	Źródła finansowania Działania	
	Łącznie	Udział Wspóln.Europejskiej	udział publicznych środków krajowych	sektor prywatny	
		Phare CBC	Phare ESC	łącznie	Łącznie	Budż. Państwa	Budż. wojew.	Budż. Powiat.*	Budż. Gmin.*	inne np. fund.cel.		
do 2001 	148307				148307	128 469			16 420	3 418		
2001	32 500				32 500	30 000			2 500			
2002	25 800				25 800	25 800						
2003	27 884				27 884	27 884						
po 2003	38 720				38 720	38 720						
łącznie	273 211				273 211*1*	250 873			18 920	3 418		
Wartość kosztorysowa zadania zgodnie z Kontraktem wojewódzkim wynosi 273 327 tys. zł.

Planowanie zadania:
wg kwartałów	I/2001	II/01	III/01	IV/01	I/2002	II/02	III/02	IV/02	I/2003	II/03	III/03	IV/03	po 2003 r.	
Harmonogram realizacji *)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Harmonogram kontraktowania **)		14 000	22 000	32 500	34 500	38 500	48 500	58 300	60 342	65 378	76 528	86 184	124 904	
Harmonogram wydatkowania **)		1 230	10 965	32 500	32 500	38 500	48 500	58 300	58 300	61 368	76 528	86 184	124 904	
 *) wypełnić: P – przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K – procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R – realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

Planowany termin zakończenia zadania	IV kwartał 2004 r.	

Monitoring zadania: 
L.p.	EFEKTY RZECZOWE 
opis wskaźników	oczekiwany przyrost wartości	źródło danych	Planowany termin osiągnięcia	
1.	Powierzchnia  oddziałów oddanych do użytku w m2	25 706 m2	Beneficjent	IV kwartał 2004 r.	
2	Ilość łóżek przekazanych do użytku w sztukach	400 sztuk	Beneficjent	IV kwartał 2004 r.	
3	Uruchomienie oddziałów neurologii i kardiologii – ilość łóżek uzyskanych w wyniku adaptacji	60 sztuk	Beneficjent	IV kwartał 2003 r.	
4	Uruchomienie drugiej stacji dializ – ilość stanowisk dializacyjnych	11 sztuk	Beneficjent	IV kwartał 2002 r.	
5	Wykonanie i wyposażenie obiektu dla Zakładu Radioterapii Wysokoenergetycznej z przyspieszaczem megawoltowym.
	1 obiekt	Beneficjent	IV kwartał 2004 r.	
6.	Powierzchnia terenów zewnętrznych – drogi, place, parkingi, lądowisko helikopterów w m2 – - dla całego obiektu

	50 570 m2	Beneficjent	IV kwartał 2004 r.	

L.p.	REZULTATY 
opis wskaźników	oczekiwany przyrost wartości	źródło danych	Planowany termin osiągnięcia	
1.	Skrócenie czasu na hospitalizację w dobach .	0,5 doby 	Beneficjent	IV kwartał 2004 r.	
2.	Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców powiatu	10 szt.	Beneficjent	IV kwartał 2004 r.	
3.	Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starych szpitali w Rybniku	17 oddziałów 	Beneficjent	IV kwartał 2002 r.	

L.p.	ODDZIAŁYWANIE* 
opis wskaźników	oczekiwany przyrost wartości	źródło danych	Planowany termin osiągnięcia	
1.	Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych w%	3 %	Beneficjent	Rok po zakończeniu realizacji inwestycji