KARTA ZADANIA
 Symbol Karty Działania:			 Numer kolejny karty zadania:
B.6
	
1	

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa zadania: 

Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

	

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia: 
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na końcu niniejszego paragrafu.

36	

Podmiot uprawniony:

Samorząd Województwa Śląskiego	

1.	DANE OGÓLNE 
Opis zadania:
W ramach zadania rozpoczęte zostaną prace związane z budową przychodni świadczącej usługi z zakresu lecznictwa onkologicznego. Obejmuje ono wykonanie stanu surowego budynku pawilonu wraz z tunelem komunik. i budynkiem TRAFO oraz rozpoczęcie stanu wykończeniowego.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiada jako jedyny w byłym województwie częstochowskim oddział onkologii, w którym funkcjonuje leczenie oparte o chemioterapię, brahyterapię i namiastkę radioterapii opartej o jeden aparat do naświetleń. Obecny stan leczenia schorzeń nowotworowych jest dalece niewystarczający i w zasadniczy sposób odbiega od przyjętych standardów. W związku z powyższym zachodzi konieczność stworzenia pełnego kompleksowego zakresu lecznictwa onkologicznego w Częstochowie. W 1997 roku na skutek decyzji władz wojewódzkich opracowano kompleksową dokumentację budowlaną planowanej inwestycji. Ponadto wszystkie media energetyczne są przygotowane do funkcjonowania obiektu. W wyniku podjętych działań w stosunkowo krótkim czasie ośrodek onkologiczny może świadczyć usługi dla społeczeństwa północnej części Województwa Śląskiego poprawiając tym samym wskaźnik dostępności do specjalistycznej opieki medycznej na tym obszarze. 

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail      [Beneficjent – osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]
Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena): 
Decyzję o realizacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 – 2002”

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)  
Efektem rzeczowym będzie  wykonanie:                                                                                     -  -     stanu surowego zamkniętego budynku  pawilonu + tunelu komun. i budynku TRAFO.                                                                                                                                                      -    rozpoczęcie stanu wykończeniowego obiektu.
	
Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT – bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego zadania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem tego zadania będzie łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie w Częstochowie bazy opieki radioterapeutycznej, a także skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie. 
	
Oddziaływanie na otoczenie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie – zmiany w regionie spowodowane realizacją zadania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)
W dłuższym okresie czasu budowa przychodni spowoduje zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych oraz poprawę stanu zdrowia zarówno mieszkańców miasta Częstochowy jak i okolic. Działanie to doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy w służbie zdrowia. Zlokalizowanie nowego ośrodka medycznego na terenie Częstochowy przyczyni się również do wzmocnienia jego funkcji jako ośrodka regionalnego	

2.	PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)
W przypadku zadania o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonego do kontraktu: zakreślić odpowiedź
Czy teren jest własnością beneficjenta	Tak	Nie 	
Czy istnieje	Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania	Tak 	Nie 	
	Projekt budowlany i pozwolenie na budowę	Tak 	Nie 	
	Raport oddziaływania inwestycji na środowisko	Tak 	Nie 	

Tabela finansowa: 
okres	Źródła finansowania Działania	
	łącznie	Udział Wspóln.Europejskiej	udział publicznych środków krajowych	sektor prywatny	
		Phare CBC	Phare ESC	łącznie	Łącznie	Budż. Państwa	inne np. fund.cel.		
Do 2001 									
2001	3 999				3 999	*3 999			
2002	1 750				1 750	1 750			
2003	3.350				3.350	3.350			
Po 2003	15.901				15.901	15.901			
Łącznie	25 000				25 000	25 000			
*kwota wydatkowana, kwota zobowiązań na  2001 rok: wynosiła -  4000 tys. zł

Planowanie zadania:
Wg kwartałów	I- 01	II-01	III-01	IV-01	I- 02	II-02	III-02	IV-02	I- 03	II-03	III-03	IV-03	Po
2003	
Harmonogram realizacji *)		PK	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
Harmonogram kontraktowania **)			
2.500
	4.000	3.999	4.249	5.749	5.749	6.089	7.499	8.672	9.099	25.000	
Harmonogram wydatkowania **)			

	3.999	3.999	4.249	5.749	5.749	5.749	6.588	8.672	9.099	25.000	
 *) wypełnić: P – przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K – procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R – realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

Planowany termin zakończenia zadania	IV kwartał 2005 roku	
Monitoring zadania: 
L.p.	EFEKTY RZECZOWE 
opis wskaźników 	oczekiwany przyrost wartości	Źródło danych	planowany termin osiągnięcia	
1.		Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) -     budynku  pawilonu + tunelu komun. i budynku TRAFO. – stan surowy zamknięty                
                                                           	  2320, 3 m 2
10252,9 m 3  	Beneficjent	IV kwartał 2001*	
2.		Stopień zaawansowania stanu wykończeniowego obiektu w %	~ 70 %	Beneficjent	IV kwartał 2003	
* Efekty uzyskane 
Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości  jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post.,  np.:

L.p.	REZULTATY 
opis wskaźników po zakończeniu inwestycji	oczekiwany przyrost wartości	źródło danych	Planowany termin osiągnięcia	
1.		Powstanie Przychodni Onkologicznej	1 przychodnia	Beneficjent	IV kwartał 2005	
2.		Skrócenie czasu  oczekiwania na specjalistyczne badania w dniach 	20 dni 	Beneficjent	IV kwartał 2005	
3.		Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji	19 miejsc	Beneficjent	IV kwartał 2005	

L.p.	ODDZIAŁYWANIE* 
opis wskaźników po zakończeniu inwestycji	oczekiwany przyrost wartości	źródło danych	Planowany termin osiągnięcia	
1.		Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji 	19	Beneficjent 	Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji	

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe