Uchwała nr 962/62/II/2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  17.07. 2003 r. 

w sprawie

zmiany uchwały własnej nr 281/31/II/2003  z  dnia 25.03.2003 r. dotyczącej  zatwierdzenia    programu   rzeczowo – finansowego  na  rok  2003 na  zadania  remontowe realizowane przez   Muzeum  Zamkowe  w  Pszczynie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz.U. nr 142/01/1590  z  późn. zm.).        

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
Zmienić uchwałę własną nr 281/31/II/2003  z  dnia 25.03.2003 r. w  sprawie zatwierdzenia     programu  rzeczowo – finansowego  na  rok  2003 na zadania remontowe realizowane przez   Muzeum  Zamkowe  w  Pszczynie  w  ten  sposób,   że  w  miejsce  załącznika  do  uchwały  wprowadzić  nowy  załącznik  pn. Aktualizacja programu rzeczowo-finansowego na  rok  2003  dla   Muzeum  Zamkowego  w  Pszczynie  - Remonty,  zwiększający  wartość  programu  o  kwotę  3.200 zł  do  kwoty 393.200 zł (trzystadziewięćdziesiąttrzytysiącedwieście złotych).

§ 2.
1.  Zawrzeć z Muzeum Zamkowym w Pszczynie  aneks  do  umowy  nr 268/IW/2003 z dnia
     27.03.2003 r.  na  dofinansowanie   w   roku   2003   zadania   remontowego  w  kwocie
     393.200 zł. 
 2.  Upoważnić  do  podpisania  aneksu:
     -  Marszałka  Województwa          -  Michała  Czarskiego
     -  Członka  Zarządu                       -  Wiesława  Marasa
 
§ 3.
Wykonanie  uchwały  powierzyć  Marszałkowi  Województwa  Śląskiego.

§ 4.
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia.

1.	Michał  CZARSKI  -  Marszałek  Województwa                   ...........................................

2.	Jan  GRELA  – Wicemarszałek  Województwa                     ...........................................

3.	Sergiusz  KARPIŃSKI – Wicemarszałek  Województwa      ...........................................   

4.	Marian  JAROSZ   -  Członek Zarządu                                  ............................................

5.  Wiesław  MARAS – Członek Zarządu                                   ............................................                                                                                    
                                  ............................................
Aktualizacja programu rzeczowo finansowego
na rok 2003 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Remonty

Lp.	Wyszczególnienie zakresu robót					 Nakłady

1.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - rozdział górny		151.855,-zł.
-	wymiana grzejników
-	wymiana rur stalowych na rury plastikowe	
-	montaż zaworów termostatycznych
Termin realizacji II – III kw.
							
2.	Remont dachu trzech wieżyczek						241.345,-zł.
-	całkowita wymiana pokrycia
-	częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych
-	całkowita wymiana deskowania
-	wymiana włazów dachowych
-	zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji drewnianej
Termin realizacji III – IV kw.
----------------------------
							Razem:  		393.200,-

Do wiadomości:
1.	1 x Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Katowice
2.	2 x a/a