Uchwała nr 1962/197/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2.11.2004 r.

w sprawie

zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Budowa Boiska szkolno – treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej” realizowanego w ramach II Przedsięwzięcia inwestycji p.n. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 142/01/1590 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Zatwierdzić protokół konieczności na wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Budowa Boiska szkolno – treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej”, realizowanego w ramach II Przedsięwzięcia inwestycji p.n. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie, na kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).
Protokół konieczności stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.	Michał Czarski - Marszałek Województwa		……………………………
2.	Jan Grela – Wicemarszałek Województwa		……………………………
3.	Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa	……………………………
4.	Marian Jarosz - Członek Zarządu			……………………………
5.	Wiesław Maras - Członek Zarządu			……………………………