Uchwała nr 1612/184/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.09.2004 r.

w sprawie

dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym, realizowane przez Gminę Bieruń.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142/01 poz. 1590 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1. Dokonać zmiany ust.  1 i 2 art. 4  oraz w ust. 1 art. 3  Umowy  dotacji  Nr 909/IW/2004 z dnia 2.08.2004 r.,dla zadania realizowanego przez Gminę Bieruń p.n. Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w  Bieruniu Nowym, finansowanego w ramach „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – Komponent Dotacje Inwestycyjne”, polegającej na: 
-	zwiększeniu całkowitego kosztu realizacji zadania inwestycyjnego z kwoty 10.816.314,57 zł do kwoty 14.090.865,66 zł.,
-	zmniejszeniu procentowego udziału dotacji w stosunku do wartości kosztorysowej zadania po przetargu, z 18,49% do 14,19%.
 
2.	Podpisać aneks do Umowy dotacji nr /IW/2004 r. dla zadania p.n. Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym w tym przedmiocie, którego projekt stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

 § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.	Michał Czarski - Marszałek Województwa			...........................................
2.	Jan Grela – Wicemarszałek Województwa			...........................................
3.	Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa	...........................................
4.	Marian Jarosz - Członek Zarządu				...........................................
5.	Wiesław Maras - Członek Zarządu				...........................................