Uchwała nr 1613/184/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z  dnia 16.09.2004 r.

w sprawie

dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. Budowa hali widowiskowo – sportowej zlokalizowanej na osiedlu Bończyk w Mysłowicach – etap II p.n. Infrastruktura techniczna wokół hali, realizowane przez Miasto Mysłowice.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz.U. nr 142/01 poz. 1590 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1. Dokonać zmiany ust. 1 i 2 art. 4 oraz w ust. 1 art. 3 Umowy dotacji Nr 905/IW/2004 z dnia 21.06.2004 r., dla zadania realizowanego przez Miasto Mysłowice p.n. Budowa hali widowiskowo – sportowej zlokalizowanej na osiedli Bończyk w Mysłowicach – etap II p.n. Infrastruktura techniczna wokół hali, finansowanego w ramach „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – Komponent Dotacje Inwestycyjne”, polegającej na:
-	zwiększeniu całkowitego kosztu realizacji zadania inwestycyjnego z kwoty
    4.748.190,56 zł. .do kwoty 4.808.764,60 zł.,
-	zmniejszeniu procentowego udziału dotacji w stosunku do wartości kosztorysowej 
     zadania po przetargu z 42,10% do 41,6 %,
-    zmianie terminu podpisania umowy z wykonawcą  na  dzień  15 września  2004 r. 

2. Podpisać aneks do Umowy dotacji nr 905/IW/2004 r. dla zadania p.n. Budowa hali widowiskowo – sportowej zlokalizowanej na osiedli Bończyk w Mysłowicach – etap II p.n. Infrastruktura techniczna wokół hali, w tym przedmiocie, którego projekt stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

 § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.	Michał Czarski - Marszałek Województwa			...........................................

2.	Jan Grela – Wicemarszałek Województwa			...........................................

3.	Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa	...........................................

4.	Marian Jarosz - Członek Zarządu				...........................................