Uchwała nr 1614/184/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.09.2004 r.

w sprawie

dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. Budowa Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalnego w Rudzie Śląskiej - Wirku - realizowane przez Miasto Ruda Śląska.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142/01 poz. 1590 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
1.	Dokonać zmiany w ust. 1 i 2 art. 4 oraz w ust 1 art. 3 Umowy dotacji Nr 532/IW/2004 z dnia 21.06.2004 r. dla zadania realizowanego przez Miasto Ruda Śląska p.n. Budowa Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalnego w Rudzie Śląskiej – Wirku, finansowanego w ramach „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, polegającej na: 
-  zwiększeniu całkowitego kosztu realizacji zadania inwestycyjnego,  z kwoty
   3.806.682,72 zł. o kwoty 3.913.534,93 zł.,
-  zmniejszeniu procentowego udziału dotacji, w stosunku do wartości kosztorysowej
   zadania  po przetargu  z  50%  do  48,63 %,
-	zmianie terminu podpisania umowy z wykonawcą na dzień 31 sierpnia 2004 r.,
   (uchwałą nr 1455/177/II/2004 z dnia 24.08.2004 r. Zarząd zaakceptował zmianę
   terminu podpisania umowy z wykonawcą przez beneficjenta). 

 2.	Podpisać aneks do Umowy dotacji nr 532/IW/2004 r. dla zadania p.n. Budowa Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalnego w Rudzie Śląskiej - Wirku w tym przedmiocie, którego projekt stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

 § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.	Michał Czarski - Marszałek Województwa			...........................................
2.	Jan Grela – Wicemarszałek Województwa			...........................................
3.	Sergiusz Karpiński – Wicemarszałek Województwa	...........................................
4.	Marian Jarosz - Członek Zarządu				...........................................
5.	Wiesław Maras - Członek Zarządu				...........................................