Załącznik do uchwały nr 1258/168/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 26.07.2004 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie prac urządzeniowo-rolnych dotyczących gminy Mstów o powierzchni 11984 ha:
-	analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych
Etap	Treść zadania	Planowany termin rozpoczęcia etapu	Planowany termin zakończenia etapu	Szacunkowe określenie zaawansowania prac w zł	
I	Przygotowanie bazy informatycznej jako podstawy  do analizy zmian w strukturze agrarnej w zakresie treści mapy ewidencyjnej.
	01.02.2004r.
	30.04.2004r.
	35%
47 600zł	
II	Przygotowanie bazy informatycznej jako podstawy do analizy zmian w strukturze agrarnej w zakresie treści danych:
-map glebowo-rolniczych
	04.05.2004r.	30.06.2004r.	30%
40 800zł	
III	 Zebranie danych dotyczących struktury agrarnej ,koordynacji prac urządzeniowo-rolnych na terenach wiejskich:
1.stanu własności i stanu władania 
2.struktury użytkowania gruntów
3.jakości rolniczej przydatności produkcyjnej
4.gleb trudnych do uprawy 
5.wyposażenie w infrastrukturę techniczną służącą bezpośrednio rolnictwu
6.demografii
7.szachownicy gruntów
	01.07.2004r.	31.07.2004r.	10%
13 600zł	
IV	Przygotowanie bazy informatycznej jako podstawy do analizy zmian w strukturze agrarnej w zakresie treści danych: map projektu granicy polno-leśnej, planu zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie tabelaryczno-graficzne zebranych danych, dla 25 obrębów gminy Mstów, dokonanie analizy i opracowanie wniosków końcowych, oraz projektu programu prac urządzeniowo-rolnych.
	02.08.2004r.	30.09.2004r.	25%
34 000zł	

Ogółem	
136 000zł	
-	monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
Całkowity koszt opracowania – 136 000zł