Uchwała nr 2346/121/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13.12.2007 r.

w  sprawie

zaakceptowania Protokołu konieczności   i  zawarcia  Aneksu  do  Umowy, dotyczącego pełnienia  dodatkowego  zakresu  nadzoru  inwestorskiego  dla  zadania  inwestycyjnego    
pn. “Modernizacja 	Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.   

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa                           (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
1.1	Postanawia się zaakceptować Protokół konieczności 1/XII/2007 z dnia 04.12.2007 r. dotyczący pełnienia dodatkowego nadzoru inwestorskiego, o wartości brutto            51.923,32 zł, który po zatwierdzeniu realizowany będzie w ramach Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”. 
Protokół konieczności nr 3/11/2007 z dnia 09.11.2007 r stanowi załącznik do niniejszej        uchwały.

1.2	Postanawia się zawrzeć Aneks do Umowy nr 1469/IW/2006 z dnia 15.09.2006 r. zawartej przez Województwo Śląskie z Inwestorem Zastępczym zadania - Raciborskim  Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym w Raciborzu - dotyczący zmiany wysokości  wynagrodzenia oraz terminu zakończenia pełnienia nadzoru dla omawianego zadania inwestycyjnego. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1.	Janusz Moszyński - Marszałek Województwa           	...........……………
2.	Grzegorz Szpyrka - Wicemarszałek Województwa 	...........……………
3.	Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu                	...........……………
4.	Marian Ormaniec - Członek Zarządu           		...........……………