ANEKS NR 1/2003

zawarty w dniu   ..............................  
pomiędzy :
                                                            
Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
1.	Marszałka Województwa                  		Michała Czarskiego
2.	Członka Zarządu Województwa     		Wiesława Marasa
a
Gminą Knurów, reprezentowaną przez:
 Prezydenta Miasta				......................................

do Porozumienia Nr 1261/KT/2002 z dnia 24.10. 2002r.

Ze względu na zaistniałe opóźnienia w procesie przygotowywania do realizacji objętego porozumieniem zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 921 z ul. Kopalnianą oraz ul. 1-go Maja w Knurowie ”, Strony w oparciu o § 6 zawierają Aneks o następującej treści:
§ 1
Do treści Porozumienia Strony zgodnie postanawiają wprowadzić zmiany:
1.	zmienić brzmienie § 1 pkt 1 na następujące: „Zarząd Województwa jako zarządca drogi wojewódzkiej nr 921 planuje wykonanie w latach 2003-2005 zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 921 z ul. Kopalnianą oraz ul. 1-go Maja w Knurowie.””;
2.	zmienić brzmienie § 2 pkt 1 na następujące: „Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach przygotowania do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, rozpoczął w roku 2003 procedurę przetargową, celem wyłonienia Projektanta opracowującego pełną dokumentację budowlano-wykonawczą wymaganą dla uzyskania pozwolenia na budowę. ”;
3.	zmienić termin obowiązywania porozumienia określony w § 4 na 31.12.2004 r.

§ 2
Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3
 Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia
§ 4
Niniejszy Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Województwo								Gmina Knurów