Załącznik do uchwały nr 136/118/II/2004
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5.02.2004r.
Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych dotyczących analizy zmian w strukturze agrarnej 
oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych dla gmin: Gilowice i Mstów
Etap	Treść zadania	Gmina Gilowice
wykonawca BBGiTR
kwota dotacji 118 000zl	Gmina Mstów
wykonawca CzBGiTR
kwota dotacji 136 000zł	
		Termin
rozpoczęcia	Termin
zakończenia	Przybliżony
% zaawansowania roboty	Termin
rozpoczęcia	Termin
zakończenia	      Przybliżony
% zaawansowania roboty	
I	Przygotowanie bazy informatycznej jako podstawy przeprowadzenia analizy zmian w strukturze agrarnej w zakresie danych:
-mapy ewidencji gruntów
-map glebowo-rolniczych
-projektu granicy polno-leśnej 
-planu zagospodarowania przestrzennego
           planu urządzeniowo--rolnego	01.02.2004r.	31.07.2004r.	80%
100 000zł	01.02.2004r.

04.05.2004r.	30.04.2004r.

30.06.2004r.	35%
47 600zł
dotyczy danych z mapy ewid.

35%
47 600zł
dotyczy pozostałych danych	
II	Zebranie danych dotyczących struktury agrarnej w zakresie:
-stanu własności
-stanu władania 
-struktura gleb wg kompleksów glebowo-rolniczych
-gleby trudne do uprawy 
-wyposażenia w infrastrukturę techniczną służącą rolnictwu
-struktury demograficznej
-szachownicy gruntów	01.02.2004r.	31.05.2004r.	10%
8 000zł	01.07.2004r.	31.07.2004r.	10%
13 600zł	
III	Opracowanie tabelaryczno-graficzne zebranych danych, dokonanie analizy istniejącej struktury agrarnej 
Opracowanie wniosków końcowych oraz programu prac urządzeniowo-rolnych 	01.56.2004r.	31.07.2004r.	10%
10 000zł	02.08.2004r.	30.09.2004r.	20%
27 200zł	
	suma			100%			100%