Aneks Nr 12
z dnia .................... 2017 r.
do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.:„Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”
zawarty pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
……………………..	……………………………………	
……………………..	……………………………………	
a	
Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka
	
§ 1. 
Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:
A.        W § 1 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2018.”
B.         W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej oraz świadczeniem usługi geodezyjnej wynosi 3.729.610 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:
- w 2013 roku 18.450,00 zł
- w 2014 roku 206.640,00 zł
- w 2015 roku 99.527,50 zł
- w 2016 roku 65.087,50 zł
- w 2017 roku 1.914.386,25 zł
- w 2018 roku 1.425.518,75 zł”
C.      W § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „2. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 35 % kosztu prac projektowych zawartych w kosztach określonych w ust 1." 
D.      W § 4 ust. 4 przyjmuje brzmienie:  „4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 65 %  kosztu prac projektowych zawartych w kosztach określonych w ust 1."
E.     W § 4 f ust. 1 przyjmuje brzmienie:  „1. W roku 2017 całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 przewiduje się na poziomie 1.914.386,25 zł z czego 1.476.000,00 zł dotyczy prac projektowych (959.400,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 516.600,00 zł po stronie Miasta Racibórz.), 38.386,25 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z.o.o. (zwana dalej RPI) oraz  400.000,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej ".
F.     W § 1 ust. 2 Aneksu nr 5 z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „2. Koszt usługi Pomocy Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 131.610,00 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2016 roku wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 38.386,25 zł a w 2018 roku kwotę 71.288,75 zł.”
G.     W § 2 ust. 1 Aneksu nr 5 z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w latach 2015 – 2018 w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, które zostaną określone w odrębnych aneksach do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.”
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie								Miasto Racibórz