P O R O Z U M I E N I E
zawarte w dniu   ..............................  
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
- ………………………………………	-	……………………………………………. 
- ………………………………………. -           ……………………………………………. 
a
Gminą Mstów, z siedzibą w Mstowie przy ul. 16 stycznia 14 reprezentowaną przez Wójta Zbigniewa Wawrzyniaka.
§ 1
1.	Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Mstów prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 786 w m. Zawada i m. Pniaki Mokrzeskie”.
2.	Zakres rzeczowy określonego w pkt. 1 zadania obejmuje budowę chodnika wraz 
z odwodnieniem w ciągu DW 786 w m. Zawada i m. Pniaki Mokrzeskie od km 11+423 do km 20+263 etap I odcinek od km 11+423 do km 16+285.
					§ 2
1.	Ustalony w przetargu koszt zadania wynosi 3.291.878,00 zł  (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych).
2.	Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Mstów  otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą zadania.
3.	Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Mstów środki finansowe przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1, na pisemne wnioski Wójta Gminy Mstów, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia:
a.	I transza w wysokości  520.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania w terminie do 20 grudnia 2006r.
b.	II transza w wysokości będącej różnicą rzeczywistego kosztu zadania i przekazanej pierwszej transzy po odbiorze końcowym zadania w 2007 r. 
4.	Do pisemnych wniosków wymienionych w pkt. 3 należy dołączyć protokoły odbiorów częściowego i końcowego robot dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz kopie rachunków i faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
§ 3
1.	Nadzór nad realizacją zadania o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
2.	Gmina Mstów powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru częściowego i końcowego zadania od wykonawcy. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie uczestniczyć w odbiorach zadania.
3.	Gmina Mstów przekaże wybudowany chodnik Województwu Śląskiemu nieodpłatnie za protokołem zdawczo-odbiorczym.
§ 4
1.	Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru zadania poprzez przedstawienie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentu dokonania zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót w danym roku.
2.	Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego w następujących terminach:
•	do dnia 29 grudnia 2006 r. 
•	do dnia 31 grudnia 2007 r. 
§ 5
Z dniem podpisania niniejszego porozumienia traci moc porozumienie nr 74/KT/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 5 września 2006r. dotyczące współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 786 w m. Zawada i m. Pniaki Mokrzeskie”.
§ 6
Porozumienie zawiera się na okres do 30 czerwca  2007 r.
§ 7
Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 
§ 8
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.
§ 9
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 10
Niniejsze porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo										Gmina Mstów