Uchwała nr 1877/102/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie

zaakceptowania robót dodatkowych ujętych w protokole konieczności, dotyczących przeprojektowania i wykonania drenażu wzdłuż ściany południowej budynku od strony Placu Chrobrego oraz odwodnienia studzienek naświetli okiennych w modernizowanym budynku biurowym przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa                     (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

				Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

						§ 1.
Postanawia się zaakceptować zakres robót dodatkowych ujętych w protokole konieczności,     do wykonania w ramach inwestycji p.n.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego                  w Katowicach”, wynikających z konieczności wykonania drenażu i odwodnienia w związku    z występowaniem zawilgocenia ścian piwnicznych od strony  Placu Chrobrego, nasilających się szczególnie po intensywnych opadach.
Protokół  konieczności Nr TI/28/2007 z dn. 24.09.2007 r. stanowi załącznik do uchwały.

						§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

						§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.	Janusz Moszyński - Marszałek Województwa          		…………………
2.	Sławomir Kowalski - Wicemarszałek Województwa            	 …………………
3.	Grzegorz Szpyrka - Wicemarszałek Województwa 		…………………
4.	Jarosław Kołodziejczyk - Członek Zarządu                     	…………………
5.	Marian Ormaniec - Członek Zarządu               			…………………